초정∼화명간 광역도로 개설

□ 사업개요

◯ 위    치 : 김해시 대동면 ~ 부산시 북구 화명동

◯ 사 업 량 : L=3.55km(김해시 2.05km, 부산시 1.5km) B=20~27.8m(4차로)

◯ 사업기간 : 2003. 11. ~ 2026. 12.

◯ 총사업비 : 301,929백만원 (공사비 247,343 보상비 41,365 기타 13,221)

◯ 연차별 투자 현황(계획)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2025	2026	비 고
합 계	301,929	255,163	7,000	39,766
국 비	81,364	76,801	1,000	3,563
도 비	34,800	31,500	1,000	2,300
시 비	103,050	64,147	5,000	33,903
부산시	82,715	82,715	-	-

□ 추진상황

◯ ‘03. 11. : 사업시행협약 체결(김해시↔부산시)

◯ ‘12. 10. : 1단계구간(안막IC~화명IC) 완료

◯ ‘17.  1. : 2단계구간(초정IC~안막IC) 재설계 착수

◯ ‘22.  6. : 총사업비 조정 승인, (264,633백만원→300,968백만원)

◯ ‘22. 12. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수

◯ ‘23.  1. : 총사업비 자율조정 승인(낙착차액 감액·56억원)

◯ ‘25.  1. : 교량 기초공사(현장타설말뚝) 시행 중 (현 공정률 28%)

□ 추진계획

◯ ‘26. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

◯ 대구~부산간 고속도로, 남해고속도로, 신항배후도로 등과의 연결을 통한 유기적인 도로망 구축으로 인적·물적 수송의 원활을 통한 국가경제발전 도모

□ 위치도

부산신항배후도로

중앙고속도로

초정 IC

안막 IC

2단계

[추진중]

1단계

[기시행]

□전경사진