(2-17) 진례 농업생산 기반시설 지원확대

추진부서(팀명)	건설과(농업기반팀)	완료시기	■임기내(‘25) □임기후
담당자(전화번호)	김민수(330-0877)	사업구분	■신규사업 □계속사업

□ 공약 목표

⃝ 진례면 농업생산기반시설의 지원확대를 통한 농업기반구축 및 영농환경개선

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

⃝ 위    치 : 김해시 진례면 일원

⃝ 농업기반시설 현황

구 분	계	배수장	양배수장	양수장	저수지	관정 (농업용)
김해시	447	39	16	54	129	209
진례면	87	2	0	7	27	51

⃝ 총사업비 : 10,509백만 원(국비 3,500 전환도비 3,767 도비 517 시비 2,725)

⃝ 세부사업내용

사업명	사업비	사업량	비고
총계	10,509	가압장 및 재처리시설 2개소, 배수장 1개소 설치 펌프 및 제진기 설치 용수관로 L=7.3km, 용배수로 설치・정비 L=1.7km
진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업	5,000	- 가압장 및 재처리시설 1개소 - 용수관로 L=7.3km
곤법지구 소규모 배수개선사업	4,259	- 배수장 1개소 - 펌프(700×80kw) 2대, 펌프(400×37kw) 1대 - 전기설비(주변압기, 변전기, 수배전반 등) 1식 - 배수로 L=928m
배수장 기능개선사업	750	- 청천배수장 펌프설치 및 협잡물 컨베이어벨트, 스크린설치
용배수로 정비	500	주민숙원사업, 주민참여예산사업 시행 용배수로 정비 L= 800m

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업	○ 재원협의 ○ 주민동의절차	○ 사업인가 ○ 설계완료 ○ 공사착공	○ 공사시행	○ 공사준공
곤법지구 소규모 배수개선	○ 예정지조사 및 기본계획서 제출 ○ 신규지구 대상지 승인	○ 기본 및 실시 설계용역 발주 ○ 시행계획 승인	○ 공사착공	○ 공사준공
배수장기능개선사업	○ 도비예산신청	○ 공사시행
용배수로 정비	○ 공사시행	○ 공사시행	○ 공사시행	○ 공사시행

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2023	2024	2025
계	10,509	1,226	2,166	5,037	2,080
국 비	3,500	844	571	2,085	0
전환도비	3,767		440	1,663	1,664
도 비	517		106	286	125
시 비	2,725	382	1,049	1,003	291

□ 기대효과

⃝ 농업생산기반시설의 정비 및 지원확대를 통한 안정적인 영농환경 구축으로 농업생산성 향상