(2-20)장유 신문지구 도시개발사업 안정적 추진

추진부서(팀명)	도시개발과(도시개발팀)	완료시기	■임기내(‘25) □임기후
담당자(전화번호)	원강호(330-3615)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 장유 신문지구 도시개발사업 안정적인 추진

□ 사업 개요

◯ 위    치 : 신문동 268번지 일원

◯ 면    적 : 556,561㎡(168천평)

◯ 사 업 비 : 2,107억 원(민간자본)

◯ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2023. 12.

◯ 수용인구 및 세대수 : 7,390명 / 3,079세대

◯ 시 행 자 : 장유신문지구 도시개발사업조합

◯ 시행방식 : 환지방식(평균감보율 54%)

◯ 현 공 정 : 33%

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	토공사 지반개량 및 지방도로이설	기반시설공사중 우수 및 오수공사	기반시설공사 우수, 오수 및 상수도공사	조경공사 포장공사	공사완료 환지처분 및 등기

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	2,107	560	90	400	300	757	-
국 비	-
도 비	-
시 비	-
민 자	2,107	560	90	400	300	757	-

※ 임기 후 사업비 : 임기 내 완료

□ 기대효과

◯ 계획적이고 체계적인 도시개발로 장유지역 주거생활 안정과 복지 향상

◯ 쾌적한 도시환경 조성 및 공공복지 증진