(2-28) 공립(단설)유치원 신설(주촌면)

추진부서(팀명)	인재육성지원과(학교지원팀)	완료시기	■임기내(‘25) □임기후
담당자(전화번호)	황민정(330-3173)	사업구분	■신규사업 □계속사업

□ 공약 목표

⃝ 유아들의 안전한 통학 및 돌봄을 위한 교육 인프라 확충

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2022 ~ 2026

⃝ 위    치 : 주촌면 선지리 248-1 [주동초(폐교) 부지 활용]

⃝ 규    모 : 부지 9,663㎡, 연면적 4,800㎡ (2층)

⃝ 사업내용 : 15학급(일반 12, 특수 3), 원아수 240명 수용, 공립(단설)유치원 1개원 신설

⃝ 사 업 비 : 200억 원(추정, 부지비 포함)

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026
사업내용	- 유치원 취학 수요 조사 : ‘22. 9. - 유아배치계획 및 신설 계획 수립 : ‘22. 12.	- 도교육청 자체투자심사 : ‘23. 1. - ‘24 당초예산 확보 : ‘23. 12.	- 설계용역 : ‘24. 1.	- 공사 착공 : ‘25. 1. - 공사 준공 : ‘25. 12.	- 개원 : ‘26. 3.

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	20,000	-	-	5,000	6,500	6,500	2,000
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-
기 타 (교육지원청)	20,000	-	-	5,000	6,500	6,500	2,000

□ 기대효과

⃝ 주촌지역 유아들의 관내 유치원 통학으로 안전한 통학권 보장

⃝ 관외 유치원 통원에 따른 학부모 부담 해소