(3-17) 능동저수지 누리길 조성

추진부서(팀명)	공원녹지과(공원행정팀)	완료시기	□임기내 ■임기후(‘27)
담당자(전화번호)	고영준(350-6313)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 도심 연접의 친구공간 활용으로 자연 산책로(누리길) 조성하여 녹색 복지
혜택 제공

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2021. 9월 ~ 2027. 6월

⃝ 위    치 : 능동저수지(삼문동 989번지 일원)

⃝ 규    모 : 0.8km

⃝ 사 업 비 : 4,488백만 원(국비 340, 시비 4,148)
⃝ 사업내용 : 수변산책데크 조성, 초화쉼터, 초화원, 숲속 쉼터 등

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	․수변산책로 (300m) ․정자쉼터 (250㎡)	․초화원 조성 (1,000㎡)	․토지매입 (사유지) ․수변산책로 연결 (200m)	․수변산책로 연결 (200m) ․편익시설 ․초화식재	․수변산책로 연결 (100m) ․편익시설

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	2026
계	4,488	488		500	2,000	600	900
국 비	340	340
도 비
시 비	4,148	148		500	2,000	600	900
민 자

□ 기대효과

⃝ 도심과 인접한 친수공간을 숲 속 힐링쉼터 공간으로 조성함으로서 일상생활에