(3-25)맑은 물 순환센터 시설정비

추진부서(팀명)	하수과(공공하수팀)	완료시기	■임기내(‘23) □임기후
담당자(전화번호)	정영수(330-3985)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 맑은물순환센터의 탄소중립 이행을 위한 적극적인 대응‧실천과 노후기자재 교체로 고효율 시설 전환 및 에너지자립률 개선

□ 사업 개요

구 분	공공하수처리시설 악취개선사업	맑은물순환센터 대수선	하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업
사업기간	21. 3. ~ 23. 5.	계속	22. 6. ~ 27. 6.
위 치	화목맑은물순환센터 외 7개소	관내 맑은물순환센터	화목맑은물순환센터 내
사 업 비	8,705백만 원 (국5,718 기896 도1,046, 시1045)	21,712백만 원 (시21,712)	43,896백만 원 (국30,727 도6,585 시6,584)
사업내용	- 탈취기 12대 신설‧보수 - 탈취덮개 3,213㎡ 등	- 고효율 송풍기 외 21건	- 증설 100톤/일 (100 → 200)

□ 연도별 추진계획

연도별		2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	악취개선	공사 착공	공사 준공
	대수선	화목 송풍기 교체 외 10건	화목 가스저장조 수선 외 4건	진영 분리막 외 14건	화목 농축기 교체 외 10건	장유 소화조 개량 외 10건
	하수찌꺼기 증설사업	기본계획 수립	- 기본 및 실시설계용역 - 환경영향평가 및 각종 인허가		토목건축공사	기계전기공사

□ 투자계획

1. 공공하수처리시설 악취개선사업

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023
계	8,705	365	4,484	3,856
국 비	5,718	300	2,825	2,593
도 비	1,046	65	605	376
시 비	1,045	0	671	374
민 자	896	0	383	513

2. 맑은물순환센터 대수선 사업

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	21,712	0	0	5,048	6,864	5,000	4,800
국 비
도 비
시 비	21,712	0	0	5,048	6,864	5,000	4,800
민 자

3. 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	43,896	308	0	2,575	8,037	20,000	12,976
국 비	30,727	250	0	500	5,000	15,000	9,977
도 비	6,585	38	0	75	2,037	3,000	1,435
시 비	6,584	20	0	2,000	1,000	2,000	1,564
민 자

※ 임기 후 사업비 : 6,000백만 원(국 4,000 도 1,500 시 500)

□ 기대효과

⃝ 고효율・노후 기자재 교체로 시설운영비 절감

⃝ 자원화처리시설의 폐열활용으로 에너지자립률 개선

⃝ 탄소중립 공공하수처리시설 기반 구축