(4-1) 친환경 트램설치

추진부서(팀명)	대중교통과(경전철지원팀)	완료시기	□임기내 ■임기후
담당자(전화번호)	김판영(330-6583)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 김해시 주요권역을 친환경 트램으로 연결하여 대중교통망 정비, 권역 간 연계 강화

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2021 ~ 2040이후

⃝ 위    치 : 김해시 경전철(봉황역, 수로왕릉역) ~ 장유지역

⃝ 규    모 : 김해 도시철도망 3개 노선(트램) 설치

⃝ 사 업 비 : 5,900억 원(1호선 1,429억 원, 2호선 3,030억 원, 3호선 1,441억 원)

⃝ 사업내용 (경상남도 연구용역 검토 노선안)

구분	구 간	연장 (km)	수요 (명/일)	사업비 (억원)	운영비 (억원/년)	B/C	AHP
노선 1	장유역 ~ 주촌 ~ 수로왕릉역	9.38	9,632	1,429.0	60.8	0.526	0.569
노선 2	장유역 ~ 율하 ~ 부곡 ~ 장유역	15.80	20,292	3,029.8	111.5	0.623	0.545
노선 3	신문 ~ 화목 ~ 봉황역	8.12	7,483	1,441.0	54.0	0.458	0.508

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	도시철도망 국토부 심의 확정	타 지자체 벤치마킹	사전타당성조사 용역 추진	예비타당성 조사 신청	노선별 기본계획 수립, 기본 및 실시설계 착수

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	350	-	-	-	150	200
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	350	-	-	-	150	200	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

* 임기후 589,650백만 원(사전타당성용역 이후 세부비용 산정가능(2024년 사타추진)

□ 기대효과

⃝ 도시철도망 건설로 시민의 대중교통편의 제고 및 탄소중립 정책 실현