(4-10)초정~화명간 광역도로 조속추진

추진부서(팀명)	도로과(도시도로팀)	완료시기	□임기내 ■임기후(’26)
담당자(전화번호)	노준영(330-3833)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 광역도로 건설사업을 조기에 완료하여 교통불편 해소 및 지역경제 활성화

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2004년 ~ 2026년

⃝ 위    치 : 김해시 대동면 ~ 부산시 북구 화명동

⃝ 규    모 : 도로건설 L=3.55km(김해시 2.05km, 부산시 1.5km), B=20~27.8m(4차로)

⃝ 사 업 비 : 304,413백만 원 (김해시 221,698, 부산시 82,715)

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	·2단계 공사 착공 (‘22. 12.)	·교량 기초말뚝 타설 1식	·교량 구조물 설치 1식	·교량 및 부대시설 1식	·공사 준공 (‘26. 12.)

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.12.
계	304,413	232,071	8,519	10,573	16,000	15,160	22,090
국 비	123,341	113,480	1,205	1,473	2,000	2,160	3,023
도 비	36,054	24,000	6,000	500	2,000	2,000	1,554
시 비	103,660	53,233	1,314	8,600	12,000	11,000	17,513
부산시	41,358	41,358	0	0	0	0	0

□ 기대효과

⃝ 김해, 창원 등 동부 경남권과 서부산권을 연결, 지역간 광역교통망 구축

⃝ 남해․중앙고속도로, 국도14호선의 교통여건 개선 및 기간도로망 확충으로  지역경제 활성화 제고