(4-15-1)국지도60호선 조기개통(생림~상동)

추진부서(팀명)	도로과(도시도로팀)	완료시기	■임기내(‘23) □임기후
담당자(전화번호)	노준영(330-3833)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 국지도 조기개통을 통한 면지역 접근성 향상 및 지역경제 활성화

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2008년 ~ 2023년

⃝ 위    치 : 김해시 생림면 나전리 ~ 상동면 매리

⃝ 규    모 : 도로건설 L=8.82km, B=20m(4차로)

⃝ 사 업 비 : 207,985백만 원 (공사비 119,387 보상비 81,000 기타 7,598)
⃝ 시행주체 : 경상남도

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	모산교 구조물 시공	공사 준공 (‘23. 5.)	-	-	-

※ ‘22. 12. 기준 전체공정율 97%

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	207,985	202,511	5,474	0	0	0	0
국 비	110,142	104,668	5,474	0	0	0	0
도 비	97,843	97,843	0	0	0	0	0

□ 기대효과

⃝ 경남도의 중부지역을 동서로 연결하는 주요 간선도로망 구축으로 지역 개발 촉진

⃝ 대구~부산간 고속도로와 연결하여 원활한 산업물동량 수송 도모

(4-15-2)국지도60호선 조기개통(한림~생림)

추진부서(팀명)	도로과(도시도로팀)	완료시기	■임기내(‘23) □임기후
담당자(전화번호)	노준영(330-3833)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 국지도 조기개통을 통한 면지역 접근성 향상 및 지역경제 활성화

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2006년 ~ 2026년

⃝ 위    치 : 창원시 의창구 대산면 북부리 ~ 김해시 생림면 사촌리

⃝ 규    모 : 도로건설 L=14.34km, B=20m(4차로) (김해시 구간 L=10.3km)

⃝ 사 업 비 : 481,919백만 원 (공사비 350,215 보상비 123,652 기타 8,052)
⃝ 시행주체 : 경상남도

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	화포교 시공 완료	○사촌교차로~가동교차로 조기개통 L=9.4km (‘23. 12.)	○잔여구간 보상 및 공사 시행 L=4.0km	○잔여구간 도로개설 L=4.0km	전체구간 완료 (‘26. 12.)

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	2026
계	481,919	333,960	40,593	47,222	28,434	20,000	11,710
국 비	358,267	236,043	32,514	38,000	20,000	20,000	11,710
도 비	123,652	97,917	8,079	9,222	8,434	0	0

□ 기대효과

⃝ 경남도의 중부지역을 동서로 연결하는 주요 간선도로망 구축으로 지역 개발 촉진

⃝ 국도25호선(창원~밀양)과 국도58호선(김해~삼랑진)을 연결하여 원활한 산업물동량 수송 도모