(4-22-1) 체육공원 정비 및 시설 확충(장유)

추진부서(팀명)	체육지원과(체육시설팀)	완료시기	■임기내(‘25) □임기후
담당자(전화번호)	김종호(330-3604)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 율하체육공원 조성사업

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2019. ~ 2025.

⃝ 위    치 : 김해시 응달동 380-1번지 일원

⃝ 규    모 : 체육공원 조성 1식(A=28,300㎡)

⃝ 사 업 비 : 17,000백만 원(균특 3,600 시비 13,400)

- 공사비 11,600, 설계비 400, 보상비 5,00

⃝ 사업내용 : 축구장, 족구장, 다목적구장, 피크닉존, 어린이모험시설 등

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	지방이양사업 예산신청	실시설계 착수 및 실시계획인가	토지 등 보상 공사 착공	공사 준공	-

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	17,000	100	400	16,500
국 비	3,600			3,600
도 비
시 비	13,400	100	400	12,900
민 자

※ 임기 후 사업비 :        백만 원(국비, 도비, 시비, 민자 구분 기재)

□ 기대효과

⃝ 다목적 체육공원 조성으로 급등하는 장유(율하) 지역 주민들의 체육 수요를 충족하여 시민들의 건전한 여가선용과 건강증진에 기여함

(4-22-2) 체육공원 정비 및 시설 확충(어방)

추진부서(팀명)	체육지원과(체육시설팀)	완료시기	■임기내(‘23) □임기후
담당자(전화번호)	김현우(330-3606), 이동협(330-3607)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 어방체육공원 시설 확충 및 개보수

□ 사업 개요

❍ 기    간 : 2023. ~ 2026.

❍ 위    치 : 김해시 어방동 746-1번지 일원

❍ 규    모 : 노후시설 개선 공사 및 소규모 수선 등

❍ 총사업비 : 500백만 원

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	어방게이트장 휴게시설 확충 공사 준공	○어방체육공원 주차장 조성공사	시설 개보수 및 유지관리	시설 개보수 및 유지관리	시설 개보수 및 유지관리

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6
계
국 비
도 비
시 비		130		500
민 자

□ 향후 계획

⃝ 정기 점검 및 시민들의 요구사항을 반영하여, 개보수 사업 등을 통한 유지관리로 안전하고 쾌적한 공공체육시설 제공하고자 함.