(4-24-1) 체육관 건립(내외동)

추진부서(팀명)	체육지원과(체육시설팀)	완료시기	■임기내(‘25) □임기후
담당자(전화번호)	정찬영(330-3603)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 내외동 생활밀착형 체육관 건립

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2018. ~ 2025.

⃝ 위    치 : 외동 1111-1번지 일원(임호체육공원 인근)

⃝ 규    모 : 국민체육센터 1식(연면적 3,600m2)

⃝ 사 업 비 : 20,000백만 원(국비(기금) 3,000, 도비 750, 시비 16,250)
⃝ 사업내용 : 다목적체육관, 수영장(25m×5레인), 다목적실(헬스장,GX) 등

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	건축설계공모 완료(‘22.8.) 실시계획인가	건축설계완료	공사 착공	공사 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023이후	2024	2025	~2026.6
계	20,000	5,750		14,250
국 비	3,000	3,000
도 비	750	750
시 비	16,250	2,000		14,250
민 자

□ 기대효과

⃝ 내외동 지역의 생활체육시설 확충을 통해 시민들에게 건전하고 건강한 여가활동 공간 제공

(4-24-2) 체육관 건립(활천동)

추진부서(팀명)	체육지원과(체육시설팀)	완료시기	■임기내(‘25) □임기후
담당자(전화번호)	정찬영(330-3603)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 활천동체육관 건립

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2016. ~ 2024.

⃝ 위    치 : 김해시 어방동 1045-4번지 일원

⃝ 규    모 : 체육관 1식(연면적 5,475m2)

⃝ 사 업 비 : 18,000백만 원(국비(균특) 4,800, 시비 13,200)

※ 공사비 : 16,500, 설계비 : 500, 감리비 : 1,000
⃝ 사업내용 : 다목적체육관, 다목적실(헬스장,GX) 등

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	공사 착공 (‘22.7.)		공사 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023이후	2024	2025	~2026.6
계	18,000	6,174	2,450	9,376
국 비	4,800	1,400	450	2,950
도 비	-
시 비	7,710	1,284		6,426
지방채	5,490	3,490	2,000

※ 2022년 당초예산 반영액 2,450백만 원(지방채(2,000),균특(450))을 활용하여 공사추진

2023년 당초예산 시 시비부족분(6,426백만 원)추가 확보 및

2023년 균특잔여예산(2,950백만 원) 확보하여 사업마무리 계획

□ 기대효과

⃝ 활천동 지역의 체육시설 확충을 통해 시민들의 건강한 여가활동 공간 제공

(4-24-3) 체육관 건립(부원동)

추진부서(팀명)	체육지원과(체육시설팀)	완료시기	■임기내(‘24) □임기후
담당자(전화번호)	김현우(330-3606)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 조성

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2018. ~ 2024.

⃝ 위    치 : 김해시 부원동 217-11번지 일원

⃝ 규    모 : 체육관(연면적 3,599.32m2) 및 테니스장 1식

⃝ 사 업 비 : 20,000백만 원(국비 4,100, 도비 750, 시비 15,150)
⃝ 사업내용 : 체육관, 수영장(25m×5레인), 헬스장, 생활문화센터, 테니스장 4면

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	기술자문위원회 심의 완료	공사 착공	공사 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023이후	2024	2025	~2026.6
계	20,000	5,750	3,000	9,300
국 비	4,100	4,100
도 비	750	750
시 비	13,450	2,850	1,300	9,300
지방채	1,700		1,700

□ 기대효과

⃝ 상대적으로 부족한 원도심 지역의 공공체육시설 인프라 확충을 통하여, 시민들의 건강한 여가선용 공간 제공

(4-24-4) 체육관 건립(장애인 전용)

추진부서(팀명)	체육지원과(체육시설팀)	완료시기	□임기내(‘25) ■임기후
담당자(전화번호)	권영조(3604)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 김해시 반다비체육센터(장애인체육관) 건립

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : 2018. ~ 2024.

⃝ 위    치 : 김해시 삼계동 산2-4번지 일원

⃝ 규    모 : 체육관(연면적 3,300m2) 조성 1식

⃝ 사 업 비 : 11,500백만 원(국비(기금) 3,000, 도비 700 시비 7,800)

※ 공사비 : 10,700, 설계비 : 400, 감리비 400
⃝ 사업내용 : 다목적체육관, 다목적실(골볼장,헬스장,탁구장) 등

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	사업대상부지 지질조사(‘22.3.) 건축설계공모 완료(‘22.8.)	실시계획인가 완료(‘23.2.) 건축설계 완료(‘23.4.) 공사 착공	공사 준공

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023이후	2024	2025	~2026.6
계	11,500	3,700		7,800
국 비	3,000	3,000
도 비	700	700
시 비	7,800	2,850		7,800
민 자

※ 임기 후 사업비 :        백만 원(국비, 도비, 시비, 민자 구분 기재)

□ 기대효과

⃝ 부족한 장애인 체육시설 확충을 통해, 장애인들의 삶의 질적 향상 도모