(4-3) 부전-마산복선전철 신월역 조기 완공

추진부서(팀명)	대중교통과(경전철지원팀)	완료시기	■임기내 □임기후
담당자(전화번호)	김판영(330-6583)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 신월역을 조기 완공하여 지역주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : ‘17. 8월 ~ ’25. 8월

⃝ 위    치 : 김해시 진례면 산본리 729번지 일원

⃝ 규    모 : 역사 1개소, 역사 부대시설

⃝ 사 업 비 : 324억 원(국비 38억 원, 원인자 286억 원)
⃝ 사업내용

先 시행분(완료)	설계, 노반, 지하연결통로	86억원	스마트레일 시행
後 시행분(추진중)	역사, 시스템, 진입도로 등	238억원	국가철도공단 위탁시행

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	역사 보완설계 및 교통영향평가 문화재시굴조사	後 시행분 착공 (건축, 시스템, 진입도로 등)	공사	後 시행분 준공 및 시운전	-

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	32,400	21,300	-	3,000	4,000	4,100	-
국 비	3,800	3,800	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	28,600	17,500	-	3,000	4,000	4,100	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-

□ 기대효과

⃝ 지역주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진하여 시민의 삶 향상