(4-30-1)상습침수지역 정비 및 배수개선사업 추진(내덕지구)

추진부서(팀명)	하수과(하수시설팀)	완료시기	■임기내(‘24) □임기후
담당자(전화번호)	박영민(330-3974)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 상습침수지역에 대한 근본적 침수해소로 삶의 질 향상과 안전한 도시 조성

□ 사업 개요

⃝ 사업기간 : ‘19. 11. ~ ‘24. 12.

⃝ 위    치 : 김해시 내덕동 63-5번지 일원(장유자동차학원 인근)

⃝ 사 업 비 : 38,133백만 원(국 26,693 기 3,432 시 8,008)
⃝ 사업내용 : 빗물펌프장 1개소(Q=900㎥/분), 우수관로 정비 L=2.1㎞

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	공사착공 (공정률 5%)	유수지 및 빗물펌프장 설치 (공정률 50%)	공사 준공 및 가동 (공정률 100%)

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	38,133	2,195	4,252	9,879	21,807
국 비	26,636	500	1,876	4,758	19,502
기 금	3,489		278	1,240	1,971
시 비	8,008	1,695	2,098	3,881	334
민 자

□ 기대효과

⃝ 상습침수 해소를 통해 시민의 생명과 재산권 보호

⃝ 집중호우로 인한 재해․재난으로부터 도시 안전 기능 강화

(4-30-2)상습침수지역 정비 및 배수개선사업 추진(칠산)

추진부서(팀명)	시민안전과(자연재난팀)	완료시기	■임기내(‘25) □임기후
담당자(전화번호)	이준수(330-3803)	사업구분	□신규사업 ■계속사업

□ 공약 목표

⃝ 칠산 이동 일원 상습침수지역을 체계적으로 정비하여 태풍 및 집중호우로부터
시민의 생명과 재산을 보호하고 지방도 1020호선 침수 방지

□ 사업 개요

⃝ 사 업 명 : 이동 자연재해위험개선지구 정비사업

⃝ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.(5년간)

⃝ 사 업 비 : 38,330백만 원(국비19,165 도비5,750 시비13,415)
⃝ 사업내용 : 배수펌프장 1개소, 유입관로 1.27㎞, 하천정비 0.75㎞, 교량재가설 1개소

□ 연도별 추진계획

연도별	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업내용	실시설계 토지보상	토지보상 배수펌프장1개소	유입관로1.27㎞ 하천정비0.75㎞	교량 94m 연결도로 408m	-

□ 투자계획

(단위 : 백만 원)

연도별 재원별	계	기투자	2022.8~	2023	2024	2025	~2026.6
계	38,330	2,600	1,000	3,470	8,000	23,260	0
국 비	19,165	1,300	500	1,735	4,000	11,630	0
도 비	9,223	390	150	868	2,000	5,815	0
시 비	9,942	910	350	867	2,000	5,815	0
민 자	0	0	0	0	0	0	0

□ 기대효과

⃝ 칠산 이동 상습침수지역 인명보호(279명), 재산보호(상가 159동, 시가지16.4ha),  지방도 1020호선 침수 방지