2-12-2	전통시장 공영주차장 확충(진영상생주차타워, 삼방공원 공영주차장 조성)
추진부서		진영상생주차타워	도시디자인과 / 재생사업2팀 / 정창영 / 8735
		삼방공원 공영주차장	교통혁신과 / 주차시설팀 / 이창현 / 4918
추진상황		정상추진		사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타		완료시기	■ 임기내(’24) □ 임기후

❏ 사업개요

구 분	진영상생주차타워	삼방공원 공영주차장
사업기간	2020~2024	2020~2025
위 치	진영읍 여래리 740-12	삼방동 674-1
규모 및 내용	주차타워 1동(주차 130면)	지하식 주차장 2층(주차 114면)
사업비	5,220백만원	11,599백만원

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
진영상생 주차타워	○진영 도시재생 활성화 계획 변경 승인 ○건축공사 발주	○ 공사착공 및 준공		-	-
삼방공원 공영주차장	○행정절차 이행 ○실시설계 완료 ○실시계획인가 및 건축협의	○ 공사착공	○ 공사준공

2) 주요 추진성과

진영상생주차타워	삼방공원 공영주차장
- ′20. 9. : 공공건축 심의 완료 - ′21. 1. : 설계 용역 계약 및 착수 - ′22. 9. : 진영 도시재생 활성화 계획 변경 승인 (사업위치 및 규모변경) - ′23. 1. : 공사 착공(주차타워 조성 예산확보) - ′23. 3.~ 6 : 주차타워 건립 주민반대로 공사중지 주민의견 수렴 및 계획수립 ⇒ 주변 상가 일조권 관련 층수변경 및 진입도로 확장 요구 : 국토부 협의 - ′23. 8. : 공사 재개 - ′23.10. : 활성화계획 변경(4층→3층) 제출 (국토교통부) - ′24. 1. : 기초완료 및 철골 공사 착수	- ′19. 11. : 지방재정 투자심사 - ′20. 5. ~ 6. : 기본설계 완료, 공공건축 심의 - ′20. 9. : 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 착수 - ′21. 10. : 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) - ′22. 5. : 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) - ′22. 10. 4. : 실시설계 용역 완료 - ′22. 10. 17. : 건축협의 및 실시계획인가 신청 (주차장, 도로 : 소로 3-104호선, 3-105호선) - ′23. 1. : 실시계획고시 - ′23. 2. ~ 6. : 건축협의, 일상감사 및 계약심사, 공사계약 - ′23. 6. 29. : 공사 착공 - ′23. 12. : 흙막이 가시설공사, 지하층 터파기 및 사토반출

3) 향후 추진계획

진영상생주차타워	삼방공원 공영주차장
- ′24. 3. : 공사 준공 및 시설물이관 - ′24. 4. : 주차장 개방	- ′24. 12. : 공사 준공 및 주차장 개방