2-14	스마트팜 조성사업 추진
추진부서		농식품유통과 / 스마트원예팀 / 홍순성 / 4083
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022 ~ 2026년

❍ 대    상 : 시설농업(원예, 과수) 농가·농업법인·생산자단체

❍ 규    모 : 159ha(300개소)

❍ 총사업비 : 12,300백만원(국 1,081, 도 1,097, 시 4,080, 자담 6,042)
❍ 사업내용 : ICT 융복합 시설장비, 정보시스템(온실제어·분석장비, 센서장비),

무인방제시설, 자동개폐기 등 현대화 시설 설치

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026.
사업내용	○ 시설원예 현대화사업 ○ 과수시설 현대화 사업 [26ha, 60개소]	○ 스마트팜 기반조성 ○ 시설현대화 사업추진 [59ha, 120개소]	○ 전략 품목 스마트팜 집중 육성 ○ 시설현대화 사업 추진 [92ha, 180개소]	○ ICT 정보화 스마트팜 집중육성 ○ 스마트팜 신규 품목 발굴 [125ha, 240개소]	○ 스마트팜 단지 조직화 ○ 통합브랜드 중심체계 구축 [159ha, 300개소]

2) 주요 추진성과

❍ ’22. 11월 : 김해 스마트팜 협의회 구성(시, 농협, 농가단체 참여)

- 5명(시 1, 농협 1, 농가단체 3)

❍ ’22. 12월 : 시설원예 현대화사업 등 8개 사업 추진 완료

- 사업량 : 60개소, 26ha, 1,414백만원 지원

❍ ’23. 2 ~ 3월 : 김해형 스마트팜 조성사업 등 10개 사업 대상자 선정 및 보조금 교부결정

- 사업량 : 58개소, 24ha, 1,560백만원

❍ ’23. 7월 : 추경예산 확보에 따른 사업대상자 추가선정 및 보조금 교부결정

- 사업량 : 4개 사업, 37농가, 11ha, 829백만원

❍ ‘23. 12월 : 23년 스마트팜 조성사업 완료(10개 사업, 114개소, 31ha, 2,630백만원)

3) 향후 추진계획

❍ ’24. 1. ~ 2월 : 24년 스마트팜 조성사업 신청

❏ 주요 쟁점사항

❍ 농가 고령화 및 임차농 증가로 스마트팜 접목·접근성 저조

⇒ 청년창업농 및 후계농업인 스마트팜 지원 강화(경영주 연령 40세 이하, 최고 가점 부여)

⇒ 사업대상자 선정시 임차농에 대한 불이익 없도록 공정성 확보

❍ 스마트팜 교육·체험 확대 필요

⇒ 농업기술센터내 스마트농업 테스트베드 교육장 신축 운영으로 매년 농업인

300명 교육 실시 추진