2-17	진례 농업생산기반시설 확대
추진부서		건설과 / 농업기반팀 / 김민수 / 0877
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2023. 1 ~ 2025. 12

❍ 위    치 : 김해시 진례면 일원

❍ 사업목적 : 진례면 농업생산기반시설의 지원확대를 통한 농업기반구축 및 영농환경개선

❍ 농업생산기반시설 현황(진례)

구 분	계	배수장	양배수장	양수장	저수지	관정 (농업용)
김해시	447	39	16	54	129	209
진례면	87	2	0	7	27	51

❍ 세부사업내용

사업명	사업비	사업량	비고
총계	10,509	가압장 및 재처리시설 2개소, 배수장 1개소 설치 펌프 및 제진기 설치 용수관로 L=7.3km, 용배수로 설치・정비 L=1.7km
진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업	5,000	- 가압장 및 재처리시설 1개소 - 용수관로 L=7.3km
곤법지구 소규모 배수개선사업	4,259	- 배수장 1개소 - 펌프(700×80kw) 2대, 펌프(400×37kw) 1대 - 전기설비(주변압기, 변전기, 수배전반 등) 1식 - 배수로 L=928m
배수장 기능개선사업	750	- 청천배수장 펌프설치 및 협잡물 컨베이어벨트, 스크린설치
용배수로 정비	500	주민숙원사업, 주민참여예산사업 시행 용배수로 정비 L= 800m

❍ 총사업비 : 10,509백만원

(단위 : 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	2023	2024	2025
계	10,509	1,226	2,166	5,037	2,080
국 비	3,500	844	571	2,085	0
전환도비	3,767		440	1,663	1,664
도 비	517		106	286	125
시 비	2,725	382	1,049	1,003	291

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업	○ 재원협의	○ 주민동의절차 ○ 사업인가 ○ 설계완료	○ 공사시행	○ 공사준공
곤법지구 소규모 배수개선	○ 예정지조사 및 기본계획서 제출 ○ 신규지구 대상지 승인	○ 기본 및 실시 설계용역 발주 ○ 시행계획 승인	○ 공사착공	○ 공사준공
배수장기능개선사업	○ 도비예산신청	○ 공사시행
용배수로 정비	○ 공사시행	○ 공사시행	○ 공사시행	○ 공사시행

2) 주요 추진성과 및 향후 추진계획

구분	진례지구하수처리수 농업용수재이용사업	곤법지구 소규모 배수개선사업	배수장 기능개선사업	용배수로 정비
추진 성과	- ’18. 7. : 국비사업 선정 - ’19. 7. : 설계 착수 - ’21. 4. : 공법선정 - ’22. 3. : 물재이용관리계획 승인 - ’22. 6. : 재원협의 요청 - ’22. 8. : 주민설명회 ※ 사업추진에 대한 주민반대로 사업이 지연되고 있어, 사업추진가능한 구역으로 계획을 변경하여 추진계획임.	- ’22. 3. : 예정지조사 및 기본계획서 제출 - ’22. 6. : 23년도 신규지구 대상지 승인 - ’22. 8. : 23년도 도비전환 사업 예산신청 - ’23. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ※ 당해사업은 청천지구 재해위험개선사업 추진 시 포함하여 추진하고 24년도 확보된 예산(10억)을 활용하여 배수개선사업 설계 및 시행계획 변경 추진예정	- ’22. 8. : 23년도 도비전환사업 예산신청 - ’23. 1. : 실시설계 착수 - ’23. 3. : 실시설계 완료	- ’22. 5. : 주민참여예산 사업계획 접수 - ’22. 8. : 주민참여예산 최종 선정 - ’23. 1. : 실시설계 착수 - ’23. 3. : 실시설계 완료 및 공사착공
추진 계획	- ’24. 1. : 주민동의절차 이행 - ’24. 3. : 재원협의완료 - ’24. 6. : 공사 착공 - ’25. 12. : 공사 준공	- ’24. 3. : 시행계획 승인 - ’24. 6. : 공사 착공 - ’25. 12. : 공사 준공	- ’23. 5. : 공사 착공 - ’24. 6. : 공사 준공	- ’23. 12. : 공사 준공