2-2	김해관광유통단지 조속 추진
추진부서		도시계획과 / 도시계획팀 / 박충범 / 3594
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 1996. 6. ~ 2026. 12. (단지조성사업 준공: '13.9.9.)

❍ 위    치 : 김해시 신문동 1411번지 일원

❍ 규    모 : 878,127.8㎡

❍ 총사업비 : 1조 2,974억원 (기반시설 3,193,  상업시설 9,781)

❍ 사업내용 : 상부시설 11개 시설물 (완공/운영 6개, 공사중 5개)

※ 미준공 시설 : 호텔(15%), 콘도, 마트, 테마파크(45%), 종업원숙소(1/5동 완료)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○호텔 착공 ○테마파크 착공	○재정비계획(안) 정비	○업무협약서(MOU)체결 ○물류단지 재정비 계획 승인(7월) ○호텔준공(7월) (개장: 9월)	○콘도 및 마트 착수 ○종업원숙소 양수	○콘도 준공 ○마트 준공 ○테마파크 준공

2) 주요 추진성과

❍ ’23. 08. : 제12차 실무협의체 회의 개최(경남도, 김해시, 롯데)

❍ ’23. 09. : 김해관광유통단지 마스터플랜 설명회 개최 (유현준 교수)

3) 향후 추진계획

❍ ’24.  3. : 업무협약서(MOU)체결(경남도, 김해시, 롯데)

❍ ’24.  5. : 물류단지 재정비계획(안) 확정(김해시, 롯데)
❍ ’24.  7. : 물류단지 재정비계획 승인(경상남도)
❍ ’24.  7. : 호텔 준공(9월 중 개장)

❍ ’25.  6. : 종업원숙소 양도·양수

❍ ’26. 12. : 테마파크, 콘도 및 마트 준공