2-24	장유권역 과밀학급 해소 및 학교 신설 추진
추진부서		인재육성지원과 / 학교지원팀 / 황민정, 김주연 / 3173, 3476
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타(도교육청)	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022 ~ 2029

❍ 사업대상 : 2개교 (초 1, 고 2)

❍ 사업내용

- 초등학교(대청초) : 학교 인근 공동주택 입주(‘23.10.) 대비 교실(8실) 증축

(공동주택사업자 증축 후 기부채납, 81억원 상당)

- 고등학교 : 동부권 구도심 고교(김해고) 이전 재배치 및 장유지역 고교 교실 추가 배치(장유고외 4개교, 45실)

․ 이전위치 : 김해시 주촌면 연지마을 일원

․ 시설규모 : 부지면적 25,000㎡, 36학급, 학생수 972명(기숙사 설치학교)

․ 사 업 비 : 500억원 정도(도교육청 건축비 예상액, 부지미 미포함)

※ 장유지역 과밀해소를 위한 초교 대상 고교 전환 검토 병행추진

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	- 대청초 증축 설계용역 : ‘22. 9. - 대청초 증축공사 착공 : ‘22. 12.	- 대청초 증축공사 준공 : ‘23. 9. - 장유고 9실 증축 완료 : ‘23. 12. (그외 4개교 3월 증축완료)	초등 통학구역 및 중고교 배치 조정 검토 용역(교육지원청) : 24. 1.~ 6. - 김고 이전 재배치 기본 계획수립(도교육청) : : ‘24. 1. ~ 6. - 투·융자심사(도교육청) : ‘24. 7. ~ 12.	- 설계용역 : ‘25. 1. ~ ‘26. 7.	- 공사착공 : ‘26. 7. - 공사준공 : ‘28. 12. - 이전개교 : ‘29. 3.

2) 주요 추진성과

❍‘23. 1. : 김해고 이전 재배치 관련 도교육감 면담(시장님↔도교육감님)

❍‘23. 3. : 장유지역 고등학교 배치시설 추가 확보

- 모듈러 교실 설치(27실) : 김해삼문고, 김해대청고, 김해율하고 각 9실

- 교실 전용(9실) : 김해수남고 9실

❍‘23. 4. 13. : 김해고 이전 재배치 업무협약 체결(김해시↔도교육청)

❍‘23. 6. ~ : 김해고 이전 재배치 관련 행정절차(개발행위제한구역 지정 등) 진행 중

❍‘23. 9. : 대청초 증축 공사 준공

❍‘23. 12. : 장유지역 고등학교 배치시설 추가 확보(장유고 9실 증축)

❍‘23. 12. : 김해고등학교 이전 재배치 추진 협의체 구성

3) 향후 추진계획

❍‘24. 1.~6. : 김해지역 초등 통학구역 및 중‧고교 배치 조정 검토 용역(교육지원청)

❍‘24. 7. ~ 11. : 도교육청 자체 투․융자 심사(도교육청)

❍‘25. 1. ~‘26.  7. : 설계용역(기본 및 실시설계) 시행(도교육청)

❍‘26. 7. ~‘28. 12. : 공사 착공 및 준공

❍‘29. 3. : 김해고 이전 개교

❏ 중점 추진사항

❍ 김해고 이전 재배치 관련 2023. 6. 사업 대상지 일원에 접수된 공동주택 사업과 연계하여

추진 중이나, 공동주택 사업 추진 지연에 따른 추진 동력 약화 우려

- 조속한 추진을 위해 현 연지마을 부지 외 대체 부지를 확보하여 Two-Track으로

이전 재배치 사업 추진

❍ 학생 수 감소 및 근거리 위치 장유지역 초교 1개교 고교 전환 적극 검토 요청(시→도교육청)

❍ 용두지구 내 초등학교(13,000㎡) 및 고등학교(12,000㎡) 용지 확보 추진