2-27	경남예술교육원 건립 지원(예술학교 기능통합 운영)
추진부서		인재육성지원과 / 학교지원팀 / 김정화 / 3176
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 도교육청	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후(‘28)

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022 ~ 2028

❍ 위    치 : 삼방동 산55번지 일원

❍ 규    모 : 부지 19,857㎡ / 연면적 6,276㎡(공연장 920석, 예술체험관 3층 29실)

❍ 총사업비 : 건축비 약835억원(추정)

❍ 건립/운영 : 경남도교육청

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○건립 예정부지 기본계획 및 기본설계용역 결과 공유 및 협의 (김해시↔도교육청) : ‘22.10.~‘22.12.	○사업 현장 방문 등실무협의 (김해시↔도교육청) : ‘23.1.~‘23.12.	○기관설립 기본계획 수립 (도교육청) : ‘24. 1. ○실무협약 협의 및 체결 (김해시↔도교육청) : ‘24. 6. ○타당성 조사연구용역 및 세부추진계획 수립(도교육청) : 상반기 ○도시기본계획변경 추진(유원지→공공공지) : ‘24. 12.	○자체투자심사 (도교육청):상반기 ○부지 소유권 이전 (가야 개발 →김해시) : 하반기	○공동투자심사 (도교육청, 김해시) : ‘26. ○실시설계 및 착공 : ‘26. ~ ’27. ○개관 : ‘28.

2) 주요 추진성과

❍‘22. 9. : 민선8기 공약사항 변경 추진(김해예술학교 건립지원 → 경남예술교육원 건립지원)

❍‘22. 9. : 경남예술교육원 건립 조속 추진 건의(시장→도교육감)

❍‘22. 11. : 건립 예정부지 기본계획 및 기본설계 용역 완료

❍‘22. 10. ~‘23. 12. : 용역 결과 공유 및 현장방문 등 협의(도교육청↔김해시)

3) 향후 추진계획

❍‘24. 1. : 기관 설립 기본계획 수립(도교육청)

❍‘24. 6. : 경남예술교육원 건립 실무협약 체결(도교육청↔김해시)

❍‘24. 상반기: 타당성 조사 연구용역 및 세부추진계획 수립(도교육청)

❍‘24. 12. : 설립 대상 부지 도시기본계획 변경 추진(유원지→공공공지)

❍‘25. 상반기 : 경상남도 자체투자심사(도교육청)

❍‘25. 하반기 : 부지 소유권이전(가야개발→김해시)

❍‘26.   : 교육부·행정안전부 공동투자심사(김해시, 도교육청↔행안부, 교육부)

❍‘26 ~ `27. : 실시설계 및 착공(도교육청)

❍‘28. : 경남예술교육원 개관