2-28	공립(단설)유치원 신설
추진부서		인재육성지원과 / 학교지원팀 / 황민정 / 3173
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타(교육지원청)	완료시기	■ 임기내(‘23) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026

❍ 위    치 : 주촌면 선지리 248-1 [주동초(폐교) 부지 활용]

❍ 규    모 : 부지 9,663㎡, 연면적 4,118㎡

❍ 사업내용 : 15학급(일반 12, 특수 3), 원아수 236명 수용, 공립(단설)유치원 1개원 신설

❍ 사 업 비 : 200억원(추정, 부지비 포함)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026
사업내용	- 유치원 취학 수요 조사 : ‘22. 9.	- 유아배치계획 및 신설 계획 수립 : ‘23. 1. - 도교육청 자체투자심사 : ’23. 2. - 건축기획 및 공공 건축물 기획용역 : ‘23. 4. ~ 6. 도시관리계획변경 협의 : ’23. 7. ~ 12.	- 도시관리계획변경 입안 : ‘24. 1. - 도시관리계획변경 : ‘24. 2. - 공사 착공 : ‘24. 7.	- 공사 준공 : ‘25. 12.	- 개원 : ‘26. 3.

2) 주요 추진성과

❍‘22. 10. : 보육시설 설치 수요 조사(교육지원청)

❍‘23. 1. : 유아배치계획 및 유치원 신설 계획 수립(교육지원청)

❍‘23. 2. : 도교육청 자체투자심사 통과

❍‘23. 4. ~ 6. : 건축기획 및 공공건축물 기획용역

❍‘23. 7. ~ 12. : 도시관리계획변경(초등학교 용지→유치원 용지) 사전 협의(시↔교육지원청)

❍‘24. 1. : 도시관리계획변경 입안 및 관계기관(부서) 협의

3) 향후 추진계획

❍‘24. 2. : 도시관리계획변경(초등학교 용지→유치원 용지)

❍‘24. 7. : 공사 착공

❍‘25. 12. : 공사 준공

❍‘26. 1. ~ 2. : 개원 준비

❍‘26. 3. : 개원

❏ 기대효과

❍ 주촌지역 유아들의 관내 유치원 통학으로 안전한 통학권 보장

❍ 관외 유치원 통원에 따른 학부모 부담 해소