3-13	대동 생태체육공원 활성화
추진부서		하천과 / 국가하천팀 / 강희정 / 4823
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘23년) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2021. 1. ~ 2024. 4.

❍ 위    치 : 대동면 조눌리 33번지 일원

❍ 규    모 : 국가하천 수변공간 156,979㎡

❍ 총사업비 : 3,000백만원(도 2,300, 시 700)

❍ 사업내용 : 녹지 등 생태 정원 및 파고라, 벤치 등 휴게공간 조성

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○2022년 여가 녹지조성 사업 준공 ○2023년 개발 제한구역 주민 지원사업 선정	○2023년 낙동강 둔치 여가녹지 조성사업(2차) A=65,860㎡ 행정절차 이행	○2023년 낙동강 둔치 여가녹지 조성사업(2차) 완료	○생태정원 유지 관리	○생태정원 유지 관리

2) 주요 추진성과

❍ 추진상황

- ‘20.  9. : 개발제한구역 주민지원사업 선정

- ‘21. 12. : 21년도 사업 완료

- ‘22.  7. : 22년도 사업(1차) 완료

- ‘23.  1. : 23년 사업(2차) 실시설계용역 발주

- ‘23.  4. : 실시설계완료 및 소규모환경영향평가 용역 착수

- ‘23.  5. : 개발제한구역 행위허가 신청 및 하천점용허가, 소규모환경영향평가 신청

- ‘23.  7. : 소규모환경영향평가 보완에 따른 정밀조사(맹꽁이 서식지) 용역 시행

- ‘23. 10. : 소규모환경영향평가 협의 완료

- ‘23. 11. : 하천점용(변경) 허가 신청(김해시 → 낙동강유역환경청)

- ‘24. 01. : 하천점용(변경) 허가 완료 및 도시계획위원회심의 신청(낙동강유역환경청→김해시)

※ 23년 사업비 확보하여 사업 추진 중에 소규모환경영향평가 등 행정절차 이행 중 맹꽁이 발견 등 보완사향 발생으로 사업 지연되었으나, 절차 이행 완료하여 24년 상반기 마무리하여 임기 내 사업 완료할 예정임.

3) 향후 추진계획

- ‘24. 02. : 도시계획위원회 심의 등 행정절차 이행 완료 및 공사 발주

- ‘24. 06. : 공사 준공