3-15	친환경 생태하천 복원(조만강)
추진부서		하천과 / 지방하천팀 / 김현경 / 3814
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25년) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. 1. ~ 2025. 8.

❍ 위    치 : 주촌면 원지리 원지교 ~ 명법동 정천교 일원

❍ 규    모 : 생태하천복원 L=5.36km

※ 제방축제 및 보축 L=2.04km, 수질정화습지 7개소, 생태학습장 2개소, 관찰데크 및 산책로 등

❍ 총사업비 : 22,740백만원(도 62%, 시 38%)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○생태하천복원 L=2.0km	○생태하천복원 L=1.0km	○생태하천복원 L=1.0km	○생태하천복원 L=1.36km	-

2) 주요 추진성과

❍ 2023년까지 사업예산 129억원 확보

※ 2024년 예산 : 4,000백만원

❍ 공사 1차분, 2차분 준공

❍‘23. 6. : 공사 3차분 착공

3) 향후 추진계획

❍ ‘24. 1. : 공사 4차분 착공

❍ ‘25. 1. : 공사 5차분 착공

❍ ‘25. 8. : 전체공사 완료