3-19	불암동 낙동강변 공원 조성
추진부서		관광과 / 관광시설팀 / 정성훈 / 2835
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2017. 1. ~ 2025. 7.

❍ 위    치 : 불암동 451-9번지 일원

❍ 규    모 : A=23,240㎡

❍ 총사업비 : 20,100백만원(균특 5,200, 도비 1,560, 시비 13,340)

※ 공사 9,300, 보상 9,600, 용역 700, 기타 500

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 실시계획인가 - GB협의 완료 - 부서 협의 완료 ○ 공원조성계획 결정 고시	○ 토지보상 완료 ○ 공사 착공 - 토목공사(1차분)	○ 공사 추진 - 건축, 조경공사 - 소방, 통신, 전기공사	○ 공사 준공 ○ 허왕후 신행길 축제 개최 ○ 인도 및 국내외 마케팅 실시	○ 허왕후 신행길 축제 개최 ○ 인도 및 국내외 마케팅 실시

2) 주요 추진성과

❍ ‘21. 12. : 토지보상 일부 완료(사유지 47% 취득, 8,217㎡)

❍ ‘22.  9. : 개발제한구역관리계획 미반영 시설 협의 완료(국토교통부)

❍ ‘22. 11. : 불암공원(문화공원) 공원조성계획(변경) 결정 고시

❍ ‘22. 12. : 실시설계용역 완료

❍ ‘23.  1. : 실시계획인가 고시 및 보상 열람 공고

❍ ‘23.  3. : 토지 등 감정평가 완료 및 보상 협의

❍ ‘23. 11. : 수용재결심의회 개최(지방토지수용위원회)

❍ ‘23. 12. : 공사 착공

3) 향후 추진계획

❍ ‘25.  4. : 공사 준공

❏ 기대효과

❍ 가락국의 허왕후 신행길을 주제로 테마형 관광명소를 조성하여 관광콘텐츠 다각화 및 시민 관광향유 기회 확대