3-22	둘레길 조성 확대(임호산, 함박산, 경운산, 반룡산)
추진부서		산림과 / 산림복지시설팀 / 구원애 / 6404
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. 6월 ~ 2025. 12월

❍ 위    치 : 임호산, 함박산, 경운산, 반룡산 일원

❍ 규    모 : 숲길(둘레길) 조성 8.5km, 기존 숲길 정비(연결) 9.0km

❍ 총사업비 : 1,200백만원(도 780, 시 420)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 사업계획 수립 ○ 현황조사 ○ 반룡산 둘레길완성	○토지사용동의 및 실시설계 (임호산,함박산)	○(임호산, 함박산)둘레길 조성 ○토지사용동의 및 실시설계(경운산)	○(경운산) 둘레길 조성	-

2) 주요 추진성과

❍ ’22. 11월 : 반룡산 둘레길 조성사업 착공

❍ ’23.  3월 : 반룡산 둘레길 조성사업 준공

❍ ’23. 11월 : 임호산, 함박산 둘레길 조성사업 실시설계 용역 착수

3) 향후 추진계획

❍ ’24.  3월        : 임호산, 함박산 둘레길 실시설계 완료

❍ ’24.  3월 ~  9월 : 임호산, 함박산 둘레길 조성 완료

❍ ’24.  1월 ~ 10월 : 경운산 둘레길 토지사용 동의

❍ ’24. 10월 ~ 12월 : 경운산 둘레길 실시설계

❍ ’25.  2월 ~ 12월 : 경운산 둘레길 조성 완료

❏ 쟁점 추진사항

❍ 계획구간이 다수의 사유지 및 이해관계인을 포함하고 있어 토지 사용 등 행정절차에 많은 시일이 소요될 것으로 예상됨

⇒ 토지사용 미동의 시 계획 노선 수정 등을 통한 둘레길 완성