3-7	플라스틱 등 재활용인프라 구축사업 추진
추진부서		자원순환과 / 자원재활용팀 / 성동수 / 3405
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. ~ 2025.

❍ 위    치 : 진영읍 설창리 820

❍ 규    모 : 재활용품 선별시설 85톤/일(기존 64톤/일)

❍ 사 업 비 : 13,662백만원(국 30%, 도 21%, 시 49%)

❍ 사업내용

- 현재 운영 중인 재활용품 선별장 노후 설비 교체 및 시설물 증축 리모델링

- 재활용품 선별시설 자동화 리모델링으로 선별율 향상 및 안정적 재활용 인프라 구축

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	~ 2023. 6.	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○총사업비 변경 협의 ○기본 및 실시 설계 착수	○기본 및 설계 용역 진행	○용역 완료 ○공사 발주 착공 ○건축, 기계 등 1식	○공사준공	-

2) 주요 추진성과

❍‘20.  6. : 사업계획 수립 및 방침 결정

❍‘21. 10. : 공유재산심의회 심의 및 중기지방재정계획 반영

❍‘23.  3. : 사업계획변경 기본계획용역 준공

❍‘23.  5. : 환경부 총사업비 변경 승인(136억)

❍‘23.  6. : 기본 및 실시설계용역 착수

3) 향후 추진계획

❍‘24.  4. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍‘24.  7. : 행정절차이행, 기자재선정, PQ, 일상감사 등

❍‘24.  8. : 공사 입찰계약

❍‘24.  9. : 공사 착공

❍‘25. 12. : 공사 준공