4-10	초정 ~ 화명간 광역도로 조속추진
추진부서		도로과 / 도시도로팀 / 추원철 / 3833
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내 ■ 임기후(‘26)

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2004년 ~ 2026년

❍ 위    치 : 김해시 대동면 ~ 부산시 화명동

❍ 규    모 : 도로건설 L=3.55km(김해시 2.05km, 부산시 1.5km), B=20~27.8m(4차로)

❍ 총사업비 : 298,784백만원(김해시 216,069 부산시 82,715)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○2단계 공사 착공 (‘22. 12.)	○교량 기초말뚝 타설 1식	○교량 구조물 설치 1식	○교량 및 부대 시설 1식	○공사 준공 (‘26. 12.)
추진율	60%	70%	80%	90%	100%

2) 사업비 투자계획 (2단계 사업)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2022년	2023년	2024이후	비 고
합 계	122,726	56,013	8,519	10,573	47,621
국 비 (특 교)	38,759	30,305	1,205	1,473	5,776
도 비	24,800	14,000	6,000	500	4,300
시 비	59,167	11,708	1,314	8,600	37,545

3) 주요 추진성과

❍‘12. 10. : 1단계(안막~화명) 공사 완료

❍‘21.  2. : 2단계(초정~안막) 재설계 완료

❍‘22.  6. : 총사업비 변경 승인 및 공사 발주(조달청 계약 의뢰)

❍‘22. 12. : 2단계(초정~안막) 공사 착공

❍‘23.  1. : 총사업비 자율조정 승인(낙찰차액 감액·56억원)

❍‘24.  1. : 교량 기초공사(현장타설말뚝) 시행 중

4) 향후 추진계획

❍‘26. 12. : 공사 준공 및 개통

❏ 중점 추진사항

❍ 총사업비 2,000억원 초과분부터 국비 25% 지원으로 지방비 부담 가중

⇒ 원활한 사업추진을 위하여 2단계(초정~안막) 사업 지방비 부담분 중 도비 추가 지원 건의