4-12-2	도시계획도로 조기개통【반룡산 산복도로】
추진부서		도로과 / 농촌도로팀 / 정영 / 3844
추진상황		이행 후 계속	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2014. 5. ~ 2024. 12.

❍ 위    치 : 관동동 율하세영리첼APT ~ 파크프라자

❍ 규    모 : 도로 개설 L=1.7㎞, B=10m

※ 미개설구간 L=542m, B=10m

❍ 총사업비 : 22,311백만원(시비 14,730, 민간 7,581)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○부지 보상 ○공사(1차분)착공L=162m	○부지 보상 완료 ○공사(1차분) 시공중L=162m ○공사(잔여분) 착공L=380m	○공사(잔여분) 준공L=380m
사업비 투자계획	7,031백만원	1,600백만원	1,700백만원

2) 주요 추진성과

❍ `19.  4. : 실시계획인가

❍ `19.  8. : 보상협의 착수

❍ `22.  6. : 총괄분 및 1차분 착공

3) 향후 추진계획

❍ `24.  1. : 잔여분(L=380m) 착공

❍ `24.  4. : 1차분(L=162m) 준공
❍ `24. 12. : 잔여분(L=380m) 준공

❏ 중점 추진사항

❍ 절토부 암반 발생 및 사면 붕적층 부분 붕괴 조짐으로 공사 지연

⇒ 공법 변경(전석쌓기→역T형옹벽, 낙석방지시설, 사면보강)으로 공사 추진