4-13	국도58호선(무계~삼계) 조기개통
추진부서		도로과 / 도시도로팀 / 정재용 / 3834
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		■ 국가 □ 도 □ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2008년 ~ 2024년

❍ 위    치 : 김해시 응달동 ~ 삼계동

❍ 규    모 : 도로건설 L=13.76km, B=20~27m(4~6차로)

❍ 총사업비 : 451,437백만원 (공사비 292,370 보상비 144,382 기타 14,685)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○감분교 외 5개소 교량 공사 시행	○감분교 외 2개소 교량 공사 및 종점부 본선구간 시공	○주촌교차로~삼계교차로구간 부분 개통 (‘24. 7.)	○전체공사준공 (‘25.12.)	-

※‘23. 11. 기준 전체공정율 72%이며, 삼계교차로 구간의 보완설계로 인해 조기개통이 연기될 수 있음.

2) 주요 추진성과

❍‘16. 12. : 동구간 공사 착공

❍‘20. 12. : 총사업비 변경승인(동지역 보상비 106억 국비 지원)

❍‘22. 10. : 삼계 감분교 및 삼계교 교량 상부 구조물 완료

❍‘22. 11. : 동지역 보상비 국비 교부(106억원)

❍‘24.  1. : 감분교 및 종점(삼계) 접속부 시공 중

3) 향후 추진계획
❍‘24.  7. : 주촌교차로 ~ 삼계교차로 부분개통

❍‘25. 12. : 공사 준공 및 개통