4-15-1	국지도60호선 조기개통(생림~상동)
추진부서		도로과 / 도시도로팀 / 추원철 / 3833
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 ■ 도 □ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2008년 ~ 2024년

❍ 위    치 : 김해시 생림면 나전리 ~ 상동면 매리

❍ 규    모 : 도로건설 L=8.82km, B=20m(4차로)

❍ 총사업비 : 209,160백만원 (공사비 120,192 보상비 81,000 기타 7,698)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 모산교 구조물 시공	○대감교차로 ~ 상동교차로 개통 (‘23. 11.)	공사 준공	-	-

‘23. 11. 기준 전체공정율 97%

2) 주요 추진성과

❍ ‘18.  2. : 상나전교차로 ~ 대감교차로 부분 개통(L=5.4km)

❍ ‘21.  9. : 대감터널 설치 완료

❍ ‘22.  1. : 포산마을 보강토 옹벽 시공

❍ ‘23. 11. : 대감교차로~상동교차로(L=0.8km, 4차로) 우선 개통

❍ ‘23. 12. : 모산교차로 토공 및 구조물 시공

3) 향후 추진계획

❍ ‘24.  6. : 공사 준공