4-15-2	국지도60호선 조기개통(한림~생림)
추진부서		도로과 / 도시도로팀 / 추원철 / 3833
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 ■ 도 □ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2006년 ~ 2026년

❍ 위    치 : 창원시 의창구 대산면 북부리 ~ 김해시 생림면 사촌리

❍ 규    모 : 도로건설 L=14.34km, B=20m(4차로)(김해시 L=10.3km)

❍ 총사업비 : 481,919백만원 (공사비 350,215 보상비 123,652 기타 8,052)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 화포교 시공 완료	○ 사촌교차로~가동교차로 구간 시공	○사촌교차로~ 가동교차로 개통 L=9.4km (‘24. 6.)	○잔여구간 도로개설 L=4.0km	○전체구간 완료 (‘26. 12.)

※‘23. 11. 기준 전체공정율 77%

2) 주요 추진성과

❍ ‘10.  5. : 공사 착공

❍ ‘21.  4. : 가동교차로 연약지반 처리완료

❍ ‘24.  1. : 화포교 시공중

3) 향후 추진계획

❍ ‘24. 10. : 사촌교차로~가동교차로 부분 조기개통(L=9.4km)

❍ ‘26. 12. : 전체구간 준공