4-16	소방도로 정비(내외동, 동상동)
추진부서		도로과 / 도시도로팀 / 황채혁 / 3835
추진상황		내외동(정상추진), 동상동(정상추진)	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

내외동

동상동

❏ 사업개요

❍ 사 업 명 : 동아APT뒤편 도시계획도로

개설공사

❍ 위    치 : 김해시 외동 산1-6번지 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=180m, B=8m

❍ 총사업비 : 700백만원

(공사비 400 보상비 250 기타 50)

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○실시계획인가 추진	○사업종료		-	-
추진율	20%	-	%	%	%

2) 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024이후	비고
합 계	700	150	0	550
시 비	700	150	0	550

3) 주요 추진성과

❍‘22. 12. : 실시설계용역 완료

❍‘23. 1. : 사업비 전액 확보

❍‘23.  2. : 실시계획인가 신청

❍‘23.  5. : 아파트 주민들의 사업추진 반대 의견 표명 ➡ 주민대표 회의 개최(2회)

❏ 중점 추진사항

❍ 동아APT주민들의 사업추진 반대의견       표명에 따라 지속적인 주민 설득으로       사업 추진

❏ 사업개요

❍ 사 업 명 : 동상3통(소2-9, 소3-5호선)

도시계획도로 개설공사

❍ 위    치 : 김해시 동상동 329-7번지 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=330m, B=6~8m

❍ 총사업비 : 4,000백만원

(공사비 1,000 보상비 3,000)

❍ 기    간 : 2018년 ~ 2026년

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	실시 계획 인가 승인	편입 토지 보상 추진	공사 착공 준공	사업 완료	사업 완료
추진율	5%	30%	50%	80%	100%

2) 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2023년	2024이후	비고
합 계	4,000	450	0	3,550
도 비	450	450	0	0
시 비	3,550	0	0	3,550

3) 주요 추진성과

❍‘18. 12. : 실시설계용역 완료

❍‘23.  3. : 실시계획인가 승인

4) 향후 추진계획

❍‘25.  1. : 공사 착공

❍‘26. 12. : 공사 준공