4-17	도심 주차공간 확충
추진부서		교통혁신과 / 주차시설팀 / 이창현 / 4918
추진상황		이행 후 계속	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘26) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.

❍ 위    치 : 김해시 관내 [‘23년 12월 현재 309,997면(공영13,602, 민영296,395)

❍ 규    모 : 3,190면(공영 2,646면, 기타 544면)

❍ 총사업비 : 64,647백만원(국 33,450, 도 3,210, 시 19,087, 기타 8,900)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○금봉교차로 휴게쉼터(231) ○동상전통시장 공영주차장(185) ○삼계44통 공영주차장(24) ○굴암산 등산로 1,2 공영주차장(24) ○삼방동 쌈지공원 1개소(10) ○내집주차장 만들기사업(18) ○주차공유(98) ○도심지 노상주차장(132)	○금봉교차로 화물차고지(200) ○삼방공원 공영주차장(100) ○인제공원 공영주차장(79) ○화목3통 공영주차장(14) ○생활SOC 복합 나눔센터주차장(75) ○생활SOC 행복 순환센터주차장(105) ○진영 상생 주차타워(132) ○봉황대길 공영주차장(44) ○관동동(율하카페) 공영주차장(80) ○삼방동 쌈지공원 2개소(12) ○내덕동 공영주차장(62) ○내집주차장 만들기사업(15) ○주차공유(68)	○지내동 공영주차장(36) ○진영1지구 공영주차장(122) ○내집주차장 만들기사업(15) ○주차공유(100) ○도심지 노상 주차장(100)	○동김해 IC 화물차고지(151) ○부원동 화물차고지(174) ○마을공동주차장(44) ○내집주차장 만들기사업(15) ○주차공유(100) ○도심지 노상주차장(80)	- 장유 응달 화물차고지(300) 마을공동주차장(50) 내집주차장 만들기사업(15) 주차공유(100) 도심지 노상 주차장(80)

2) 주요 추진성과(※ 총 주차면 : 986면, 조성완료 : 475면, 조성중 : 511면)

❍ ’23.  3. : 생활SOC 복합나눔센터 주차장(75면) 준공

❍ ‘23. 12. : 율하중학교 무료야간개방주차장(50면) 협약

❍ ’23.  6. : 금봉교차로 화물차고지(200면) 24필지 중 11필지 보상 완료

❍ ’23.  6. : 삼방공원 공영주차장(100면) 착공

❍ ’23.  6. : 화목3통 공영주차장(14면) 추가 조성 준공

❍ ‘23.  6. : 이동 임시공영주차장(18면) 개방

❍ ’23.  9. : 인제공원 공영주차장(79면) 착공

❍ ‘23. 10. : 진영 상생 주차타워(132면) 착공

❍ ‘23. 11. : 봉황대길 공영주차장(44면) 준공

❍ ‘23. 12. : 관동동(율하카페) 공영주차장(80면) 준공

❍ ‘23. 12. : 내덕동 공영주차장(62면) 준공

❍ ‘23. 12. : 생활SOC 행복순환센터주차장(105면) 준공

❍ ‘23. 12. : 삼방동 삼지공원 2개소(12면) 준공

3) 향후 추진계획

❍ ‘24. 1. ~ : 공영주차장(공영차고지) 조성사업 지속 추진

❍ ‘24. 2. ~ : 주차공유 활성화 사업 및 공한지 주차장 활용으로 저비용 고효율의 주차시설 확충

❍ ‘24. 3. ~ : 진영1지구 공영주차장 조성사업 착공