4-18	진례 복합레저스포츠파크 조성
추진부서		도시개발과 / 민자사업팀 / 권오현 / 6703
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	□ 임기내(’25) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2005. 6. ~ 2026. 12.

❍ 위    치 : 진례면 송정리 외 5개리 일원

❍ 규    모 : 3,754천㎡ (골프장 2,374, 운동장 177, 주택단지 995, 도로 등 208)

❍ 총사업비 : 10,062억원 (민간자본)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○골프장 및 도로 실시계획변경 인가	○도로공사 착공	○시례지구주택단지 부분 준공 ○골프장 및 운동장 착공	○골프장, 운동장, 도로 공사 추진	○전체사업 완료 ○시설물 인수 및 법인 청산

2) 주요 추진성과

❍ ‘19.  5. : 도시개발사업(시례지구) 착공(현 공정률 99%)

❍ ‘22.  3. : 시례지구 도시개발사업 공동주택부지 1차 공급

❍ ‘22.  5. : 도시계획시설(골프장) 실시계획변경인가(기간연장)

❍ ‘22.  7. : 도시계획시설(도로) 실시계획변경인가(기간연장)

❍ ‘23.  2. : 도시계획시설(도로) 공사 착공

❍ ‘23.  9. : 중앙도시계획위원회 심의(시례지구 개발계획 변경)

❍ ‘23. 12. : 골프장(27홀) 입찰 공고

3) 향후 추진계획

❍ ‘24.  1. : 골프장(27홀) 공사 착공

❍ ‘24.  2. : 주주협약 변경을 위한 이사회 및 주주총회 개최

❍ ‘24.  3. : 주주협약 변경 체결

❍ ‘24.  7. : 시례지구 도시개발사업 부분 준공

※ ’23. 7월 부분준공 예정이었으나 기반시설 인수·인계에 따른 보완 중

❍ ‘26. 10. : 도시계획시설사업(골프장, 운동장, 도로) 준공

❍ ‘26. 12. : 도시계획시설사업(운동장, 도로) 시설물 인수 및 법인 청산

❏ 중점 추진사항

❍ 주주협약서상 계획과 다른 사업기간 및 김해시에 불리한 조항 변경 필요

(운동장 기부채납 조건, 구역 외 도로 개설주체 등)

⇒ 임시 주주총회 개최 후 주주협약 변경 체결(24년 3월 예정)