4-19	김해시 축구센터 건립
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 이양규 / 3605
추진상황		일부추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2023. ~ 2026.

❍ 위    치 : 진례면 김해스포츠레저타운 내

❍ 규    모 : 축구센터(연면적 8,000m2), 축구장 4면 등

❍ 총사업비 : 미정(사업시행자(록인)와 협의 후 결정)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 사업자 협의	○ 스포츠 레저타운 공사 착공	○ 스포츠 레저타운 준공	○ 축구센터 건립 등 부족분 공사	○사업 준공

2) 주요 추진성과

❍ 도시개발사업 주관부서인 도시개발과, 사업시행자(록인)와 축구센터 협의

❍ 진례면 간담회 3회(체육회, 발전협의회)

❍ 축구센터 건립 추진계획 보고

3) 향후 추진계획(주요 투자계획)

❍ 24. 2. : 체육시설(운동장) 변경 국토부 협의

❍ 24. 3.~10. : 실시계획 변경 인가 및 실시설계용역 변경

❍ 24. 12. : 축구센터 공사착공

❍ 26. 12. : 축구센터 조성완료

❏ 중점 추진사항

❍ 진례면에 계획 중인 김해레저스포츠타운 조성과 관련하여 담당부서인 도시개발과 및 시행사 ㈜록인과 연계 협의하여 축구센터 건물 및 필요시설 반영 요청하고 예산절감 및 활용도 높은 레저스포츠타운 조성