4-20	체육시설 확충 및 공공시설 개방
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 김종호, 권영조, 이양규, 김동형 / 3603, 3604, 3605, 3607
추진상황		정상 추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 장기계속 추진사업

❍ 위    치 : 관내 체육시설(체육관, 체육공원)

❍ 규    모 : 체육관 4개소, 체육공원 1개소

❍ 총사업비 : 총108,791백만원 [※ 사업별 별도]

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○진영스포츠센터 완공	○율하체육공원 실시설계 착수 ○원도심 체육관 설계변경용역	○반다비체육센터설계(변경)착수 ○원도심, 내외동 체육관 착공 ○율하체육공원 부지보상	○원도심, 내외동 체육관 준공 ○율하체육공원 착공	○반다비 체육센터 준공 ○율하체육공원 준공

2) 주요 추진성과

❍ ‘22. 12. : 진영스포츠센터 완공

❍ ‘23.  5. ~ 6. : 진영스포츠센터 시범운영

❍ ‘23.  7. : 진영스포츠센터 개관

❍ ‘23.  7. : 율하체육공원 실시설계 용역 착수

3) 향후 추진계획

❍ ‘24. 2.  : 반다비 체육센터 기획 설계용역 착수

❍ ‘24. 5.  : 반다비 체육센터 건축설계 공모
❍ ‘24. 6.  : 원도심, 내외동 체육관 착공, 반다비 체육센터 실시설계 용역 착수

❍ ‘25. 3.  : 율하체육공원 착공

❍ ‘25. 6.  : 반다비 체육센터 착공

❍ ‘25. 12. : 원도심, 내외동 체육관 준공

❍ ‘26. 6.  : 율하체육공원 준공

❍ ‘26. 12. : 반다비 체육센터 준공