4-21	파크골프장 환경개선 및 확충(칠산 파크골프장 조성)
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 권영조 / 3604
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. ~ 사업비 확보 후 사업 재시행

❍ 위    치 : 김해시 이동 760-8번지 일원

❍ 규    모 : 파크골프장 조성 1식(A=15,000m2)

❍ 총사업비 : 700백만원

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○사업추진 검토	○행정절차 신청 (하천점용허가, 개발제한구역 행위허가) ○실시설계용역 완료	○행정절차 이행 완료(하천점용 허가, GB행위 허가) ○1회 추경 예산 확보 ○공사 시행	○공사 완료

2) 주요 추진성과

❍ ‘23.  6. : 실시설계 및 소규모환경영향 평가 용역 시행

❍ ‘23. 11. : 하천점용허가 신청

❍ ‘23. 12. : 실시설계용역 완료

3) 향후 추진계획

❍ ‘24.  3. : 행정절차 이행 완료(하천점용허가, GB행위허가)

❍ ‘24.  4. : 24년 1회 추경 예산 요구
❍ ‘24.  7. : 공사 착공

❍ ‘24. 12. : 공사 완료