4-22-2	체육공원 정비 및 시설 확충[어방]
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 김현우 / 3606
추진상황		정상 추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. ~ 2025.

❍ 위    치 : 김해시 어방동 746-1번지 일원

❍ 규    모 : 노후시설 개선 공사 및 소규모 수선 등

❍ 총사업비 : 500백만원(전환 150, 시비 350)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○어방체육공원 주차장 조성공사 실시설계 완료	○어방체육공원 주차장 조성공사 지방전환사업 신청	○어방체육공 주차장 조성공사 지방전환사업 재신청	○어방체육공 주차장 조성공사 착공 및 준공

2) 주요 추진성과

❍ ‘21. 5. ~ 7. : 어방체육공원 노후시설 개선사업(게이트볼장 1면 조성, 사업비 : 120백만원)

❍ ‘21. 9.      : 어방체육공원 관람석 및 조명시설 정비(차양 A=250㎡, 사업비 : 120백만원)

❍ ‘22. 6. ~ 8. : 어방게이트장 휴게시설 정비사업(전동차광 설치 1식, 사업비 : 150백만원)

❍ ‘22. 7.      : 어방체육공원 주차장 조성공사 실시설계시행

❍ ‘22. 12.     : 실시설계용역 완료

❍ ‘23. 1.      : 주차장 조성공사 부지 분묘개장 공고(1차) 및 분묘 감정평가의뢰

❍ ‘23. 3.      : 주차장 조성공사 부지 분묘개장 공고(2차)

❍ ‘23. 5.~ 12. : 유연분묘 보상 묘지 12식

3) 향후 추진계획

❍ ‘24. 2. ~ 5. : 무연분묘에 대한 행정 절차 진행

❍ ‘24. 7.      : 지방전환사업 재신청