4-23	대동면 복합스포츠타운 건립
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 김종호 / 3603
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. ~ 2026.

❍ 위    치 : 김해시 대동첨단산업단지 내

❍ 규    모 : 국민체육센터 1식(연면적 A=3,000m2)

❍ 총사업비 : 20,000백만원

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○공모사업 준비	○사업계획 수립 및 건축대상지 검토	○공모사업 신청 ○건축설계공모	○실시설계용역착수	○공사 착공

2) 주요 추진성과

❍ ‘19.  1. : 기본계획 용역 착수

❍ ‘19.  4. : 기본계획 용역 완료

❍ ‘21.  6. : 산업단지계획 변경 중도위 심의

3) 향후 추진계획

❍ ‘24.  1. : 대동첨단산업단지 내 컨벤션·기업지원센터 공공시설용지 내 체육관 입지

❍ ‘24.  4.  : 공공시설용지 매입(전략산업과)  ※전략산업과에서 컨벤션 공공시설용지 일괄 매입

❍ ‘24. 7.  : 공모사업 신청

❍ ‘24. 10. : 건축설계공모

❍ ‘25. 1.  : 실시설계용역 착수

❍ ‘26. 1.  : 공사 착수

❍ ‘27. 6.  : 공사 준공