4-24-1	체육관 건립(내외동)
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 이양규 / 3604
추진상황		정상 추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. ~ 2025.

❍ 위    치 : 외동 1111-1번지 일원(임호체육공원 인근)

❍ 규    모 : 국민체육센터 1식(연면적 3,600m2)

❍ 총사업비 : 14,000백만원(국비[기금] 3,000, 도비 750, 시비 10,250)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○건축설계공모 ○실시설계 착수	○실시설계 중	○실시설계 완료 ○공사 착공	○공사 준공

2) 주요 추진성과

❍ ‘18. 11. : 공모사업 선정

❍ ‘19. 4.  : 기본계획 용역 완료

❍ ‘20. 9.  : 도시계획시설 변경 결정

❍ ‘21. 6.  : 토지보상완료(‘21.01. 협의보상 시행)

❍ ‘21. 9.  : 분묘이전 공고, 지질조사용역 시행

❍ ‘22. 8.  : 건축설계공모 완료

❍ ‘22. 9.  : 실시설계용역 착수

❍ ‘23. 2.  : 소규모 재해영향평가 용역 실시

❍ ‘23. 7.  : 설계 경제성 검토(VE) 용역 발주

3) 향후 추진계획

❍ ‘24.  2. : 사업계획 변경 협의 및 승인(경남도, 문체부)

❍ ‘24.  4. : 건축설계 완료
❍ ’24.  6. : 공사 착공

❍ ‘25. 12. : 공사 준공