4-24-2	체육관 건립(활천동)
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 김종호 / 3603
추진상황		정상 추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2016. ~ 2024.

❍ 위    치 : 김해시 어방동 1045-4번지 일원

❍ 규    모 : 체육관 1식(연면적 5,475m2)

❍ 총사업비 : 16,000백만원(국비(균특) 4,800, 시비 11,200)

※ 공사비 : 16,500, 설계비 : 500, 감리비 : 1,000

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○공사 착공	○공사 진행	○공사 준공

2) 주요 추진성과

❍ ‘16. 5.  : 추진계획 보고

❍ ‘17. 10. : 투자심사 완료(김해시 자체)

❍ ‘18. 10. : 주민설명회 개최

❍ ‘19. 11. : 건축설계 착수

❍ ‘20. 5.  : 건축설계 완료

❍ ‘21. 4.  : 김해도시관리계획(용도지역) 변경 완료

❍ ‘21. 7.  : 건축협의 완료

❍ ‘22. 2.  : 건설사업관리용역 PQ 및 공사입찰 공고

❍ ‘22. 7.  : 공사 착공

❍ ‘23. 6.  : 1차분 공사 준공

❍ ‘23. 7.  : 2차분 공사 착공

3) 향후 추진계획
❍ ‘24. 4.   : 공사 준공

❍ ‘24. 4~5. : 시운전 및 집기물품 설치

❍ ‘24. 6.   : 개관