4-24-3	체육관 건립(부원동)
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 김동형 / 3603
추진상황		정상 추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. ~ 2025.

❍ 위    치 : 김해시 부원동 217-11번지 일원

❍ 규    모 : 체육관(연면적 3,599.32m2) 및 테니스장 1식

❍ 총사업비 : 19,800백만원(국비 4,100, 도비 750, 시비 14,950)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○기술자문위원회 심의 완료 ○실시설계 착수	○실시설계 완료 ○실시설계변경 용역 착수	○공사 착공	○공사완료

2) 주요 추진성과

❍ ‘19. 3.  : 생활체육시설 지원사업 공모 선정

❍ ‘20. 5.  : 부지 매입(한국도로공사)

❍ ‘20. 8.  : 테니스장 조성완료(4면) 및 체육관 건축설계 공모

❍ ‘21. 2.  : 국유재산 토지매입 신청(부원동 981-51)

❍ ‘21. 11. : 건축설계 완료

❍ ‘22. 6.  : 기술자문위원회 심의 및 경제성(VE) 검토완료

❍ ‘23. 4.  : 건축협의 완료 및 국유재산 토지매입(부원동 981-51)

❍ ‘23. 7.  : 추진계획보고(시장님)

❍ ‘24. 1.  : 실시설계변경 용역 착수

3) 향후 추진계획

❍ ‘24. 4.  : 실시설계용역 준공

❍ ‘24. 5.  : 건설사업관리 용역 착수

❍ ‘24. 6.  : 공사 착공

❍ ‘25. 12. : 공사 준공