4-24-4	체육관 건립(장애인 전용)
추진부서		체육지원과 / 체육시설팀 / 김종호 / 3603
추진상황		정상 추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	□ 임기내(년도) ■ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2018. ~ 2025.

❍ 위    치 : 김해시 삼계동 산2-4번지 일원

❍ 규    모 : 체육관(연면적 3,300m2) 조성 1식

❍ 총사업비 : 9,000백만원(국비(기금) 3,000, 도비 700 시비 5,300)

※ 공사비 : 8,200 설계비 : 400  감리비 400

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○사업대상부지 지질조사 ○건축설계공모 완료 ○실시설계 착수	○실시계획인가 완료	○건축설계 완료	○공사 착공	○공사 준공

2) 주요 추진성과

❍ ‘19.  3. : 생활체육시설 지원사업 공모 선정

❍ ‘19.  6. : 투자심사 완료(경상남도)

❍ ‘20.  6. : 공공건축심의 완료

❍ ‘22.  3. : 사업대상부지 지질조사 추진

❍ ‘22.  8. : 건축설계공모 완료

❍ ‘22.  9. : 실시설계용역 착수

❍ ‘23.  2. : 소규모 지하안전평가 용역실시

❍ ‘23.  7. : 설계 경제성 검토(VE) 용역발주

❍ ‘23. 12. : 설계 경제성 검토(VE) 용역준공

3) 향후 추진계획

❍ ‘24.  2.  : 기획 설계용역 착수

❍ ‘24.  5.  : 건축설계 공모

❍ ‘24.  6.  : 건축 실시설계 용역 착수

❍ ‘25.  4.  : 건축 실시설계 용역 준공

❍ ‘25.  5.  : 건설사업관리 용역 착수

❍ ‘25.  6.  : 착공

❍ ‘26. 12.  : 준공