4-26	반려동물 공원(수영장, 놀이터)조성
추진부서		공원녹지과 / 공원조성팀 / 오진주 / 6373
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내 □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2020. 6월 ~ 2023. 12월

❍ 위    치 : 김해시 어방동 984-2번지 일원(분산성 근린공원內)

❍ 규    모 : 15,412㎡

❍ 총사업비 : 3,300백만원(공원조성비 2,000 토지보상비 1,300)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	토지매입 각종 용역 및 인가절차 이행 조성공사(1차분)	조성공사(2차분) 공원 개장

2) 주요 추진성과

❍ ’22.  3월 : 경남도 특조금 결정(10억), 매장문화재 지표조사 용역 완료

❍ ’22.  4월 : 실시설계 용역 시행, 매장문화재 발굴(표본)조사 용역 시행 및 “중지”

※ 토지 및 지장물 보상 협의 지연으로 인한 문화재 관련 용역 중지

❍ ’22.  5월 ~ 10월 : 실시설계 용역 완료, 토지매입 완료, 선진지 견학 및 자문 등

❍ ‘22. 11월 : 공사(토목, 전기, 정보통신) 발주 및 “중지” ※ 보상 지연으로 공사 중지

❍ ’23.  2월 : BF예비인증(진입로) 용역 시행

❍ ’23.  3월 : 지장물 보상완료, 매장문화재 발굴(표본)조사 용역 완료

❍ ’23.  5월 : 매장문화재 정밀발굴조사 용역 시행

❍ ’23.  9월 : 건축(카페, 화장실, 관리동) 설계 용역 시행

❍ ’23. 11월 : BF예비인증(진입로) 완료, 매장문화재 정밀발굴조사 용역 완료

3) 향후 추진계획

❍ ’24.  1월 : 공사(토목) “재개”

❍ ‘24.  3월 : 건축(카페, 화장실, 관리동) 설계 용역 완료

❍ ’24.  5월 : 공사(전기, 정보통신) “재개”

❍ ‘24.  9월 : 건축공사 시행

❍ ’24. 12월 : 반려동물 테마공원 조성사업 완료 및 개장