4-3	부전-마산 복선전철 신월역 조기 완공
추진부서		대중교통과 / 경전철지원팀 / 김판영 / 6583
추진상황		일부추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 17. 8월 ~ 26. 8월

❍ 위    치 : 김해시 진례면 산본리 729번지 일원

❍ 규    모 : 역사 1개소, 역사 부대시설

❍ 총사업비 : 442억원(당초 324억원_국비 38억원, 김해시 286억원) *24. 1. 변경설계완료

* 국비는 기재부 총사업비관리지침에 따라 재무적타당성 확보되는 사업비의 50%인 5,057백만원 산정(기존 3,756백만원)

⇒ 추가필요 시비 : 18,640백만원

❍ 사업내용

先 시행분(완료)	설계, 노반, 지하연결통로	스마트레일 시행 (86억원)
後 시행분(예정)	역사, 시스템, 진입도로 등	국가철도공단 위탁시행

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○역사 보완설계 및 교통영향평가 ○문화재시굴조사	○문화재시굴조사 ○역사보완설계 및 인허가 완료	○後 시행분 착공 (건축, 시스템, 진입도로 등)	○後 시행분 공사	○後 시행분 준공 및 시운전

2) 주요 추진성과

❍‘21. 11. : 개발제한구역 관리계획변경 완료(중앙도시계획위원회 심의)

❍‘22.  6. : 설계변경 및 교통영향평가 등 행정절차 이행

❍‘22.  8. : 문화재 발굴(시굴)조사 착수

❍‘23.  6. : 교통영향평가 변경 심의 완료

❍‘23. 10. : 변경설계 결과물 검토(5개월) *공사기간 적정성 검토, BF 예비인증 절차 시행

3) 향후 추진계획

❍‘24.  3. : 後시행분 공사발주 요청(시→국가철도공단)

* 국가철도공단 3개월정도 검토후 상반기 중 공사 발주 예정
❍‘26.  8. : 공사 준공 및 시운전 *공사기간 적정성 용역결과(12월) 및 착공일에 따라 변동됨