4-30-2	상습침수지역 정비 및 배수개선사업 추진(칠산 지구)
추진부서		시민안전과 / 자연재난팀 / 최정식 / 3803
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 사 업 명 : 이동 자연재해위험개선지구 정비사업

❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.(5년간)

❍ 사 업 비 : 38,330백만원(국비19,165 도비9,222 시비9,943)
❍ 사업내용 : 배수펌프장 1개소, 유입관로 1.27㎞, 하천정비 0.75㎞, 교량재가설 1개소

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	실시설계	토지보상 72필지(7,041㎡) 공사착공 배수펌프장1개소	유입관료 1.27㎞ 하천정비 0.75㎞ 공사착공 배수펌프장1개소	교량 94m 연결도로 408m 공사완료

2) 주요 추진성과

❍‘21. 12. : 주민설명회 개최

❍‘22. 06. : 배수펌프장 부지 매입 및 무상귀속 협의

(한국농어촌공사부지 9필지 1,765㎡, 농림부 1필지 579㎡)

❍‘22. 07. : 기본설계 심의(조건부, 행정안전부)

❍‘22. 12. : 지구지정 변경 승인(행정안전부)

❍‘23. 10. : 실시설계 단계 심의에 따른 사전협의 완료(행정안전부 3회 방문)

※‘23. 10. 26. 기준 보상율 91%(총 72필지 7,041m2 중 62필지 6,387m2 완료)

3) 향후 추진계획

❍‘24. 01. : 실시설계 심의 승인 신청(행정안전부)

❍‘24. 06. : 공사 착공

❍‘25. 12. : 공사 준공

❏ 중점 추진사항

❍ 행정안전부의 기본 및 실시설계 승인 기간 소요(기본설계 단계 1회, 실시설계 1회)

❍ 마찰교 재가설 및 사업구역 확대(경남도 시행 잔여 명법구간 반영)에 대해 행정 안전부 반대에 따른 이해설득 기간 소요 → 행정안전부 승인 완료

❍ 연약지반 보강 및 사업구역 확대에 따른 총사업비 증액(90억원 정도) 되어 행정 안전부 이해설득 기간 소요 → 행정안전부와 사전협의 진행중