4-31	도심하천 종주 둘레길 완성
추진부서		하천과 / 지방하천팀 / 신재석 / 3814
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘25년) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. 1. ~ 2025. 12

❍ 위    치 : 봉하마을→ 낙동강 → 해반천 → 장유누리길 → 장유암 일원

❍ 규    모 : 둘레길 조성 =73km, B=2.0m ~ 4.0m

❍ 총사업비 : 3,500백만원(국비 2,500  시비 1,000)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 기본계획수립	○실시설계 바닥표시 73km, 안내표지판 100개소	○서낙동강둘레길 L=5.9km, ○둑마루 포장 L=2.6km ○교량 3개소	-	-

2) 주요 추진성과

❍ 도심하천 종주 둘레길 완성을 위해 2021년 장유누리길 L=13.5km 완성

❍ 2022년 도심하천 종주 둘레길 L=73.0km 기본계획수립 완료

❍ 바닥표시 13km, 안내표지판 35개소 설치

※서낙동강 수변길 조성 지연으로 전체 바닥표시 안내표지판 설치 지연 불가피

3) 향후 추진계획

❍ ‘24. 03. : 개발제한구역 주민지원사업 재공모

❍ ‘24. 09. : 실시설계용역 완료 및 공사 착수

❍ ‘25. 01. : 서낙동강 치수사업 착공(서낙동강 둘레길 확보, 낙동강유역환경청)

❍ ‘25. 12. : 전체공사 완료

	《 서낙동강 수변길 조성사업 병행 추진 》
❖사업내용 : 낙동강유역환경청에서 추진하는 서낙동강 종합정비계획에 포함된 제방축제, 준설공사(총 사업비 1,500억원) ❖우리시 요구 : 둘레길 L=5.9km, 둑마루 포장 L=2.6km(추가사업비 100억) ➡ 2024년 실시설계 완료 예정