4-34-1	도시재생사업 추진(삼안동)
추진부서		도시디자인과 / 재생사업2팀 / 노준영 / 8733
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(’24) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2019. ~ 2024.

❍ 위    치 : 김해시 삼방동 161-1번지 일원 (A=218,553㎡)

❍ 총사업비 : 33,350백만원 (국비 18,000 특교 1,000 도비 3,600 시비 10,750)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○거점시설 설계, 착공 및 준공 ○S/W사업 착수	○거점시설 준공 및 운영 ○S/W사업 완료	○거점시설 준공 및 운영	○거점시설 활성화 방안 검토 및 추진	※ 임기내 완료

2) 주요 추진성과

❍ ’20. 12. : 삼방청년허브 준공

❍ ’21. 12. : 삼방어울림센터, 신어아트센터 준공

❍ ’22. ~  : 14개 S/W사업 진행중

※신어아트센터 소극장(2022.5.), 창업지원공방(2022.9.) 삼방어울림페스티벌(2022.11.) 등

❍ ’22. 12 : 인제공원 공영주차장 조성사업 착공

❍ ’23. 12.

- 김해대지역공헌허브 및 쌈지주차장 조성사업 준공

- 인제대 및 김해대 연계 도시재생 S/W사업 완료

3) 향후 추진계획

❍ ’24. 06. : 삼방 스마트돋움랩 거점시설 준공

❍ ’24. 10. : 활성화계획 변경 승인 및 고시

- 인제지역공헌뉴딜센터, 어울림다리 사업제외

❍ ’24. 12. : 인제공원 공영주차장 거점시설 준공

❏ 중점 추진사항

❍ 2024년 사업 완료에 따라 지방비 추가(24억원) 확보 필요

⇒ 부족 사업비 24억원 2024년 1회추경 예산 반영 건의