4-34-2	도시재생사업 추진(불암동)
추진부서		도시디자인과 / 재생사업1팀 / 이준수 / 3913
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(’25) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2022. ~ 2025.

❍ 위    치 : 김해시 불암동 220-84번지 일원 (A=120,000㎡)

❍ 총사업비 : 12,947백만원 (국비 7,300 도비 1,460 시비 3,407 기금 730, 민간 50)

❏ 추진성과 및 계획

1) 세부 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○ 강변이음센터 건축설계업체 선정 및 계약 ○ 주민역량강화 프로그램 운영 등 SW사업 추진	○ 강변주민보행 공간 정비공사준공 ○ 이음건널목 조성 공사 및 소음저감 도로정비공사 준공	○ 불암100년길 정비 공사 준공 ○ 강변이음센터 및 강변이음교 준공 ○ 집수리지원사업 완료	○ 꼼지락이음센터 준공 ○ 주민공모사업 등 전체사업 완료	※ 임기내 완료

2) 주요 추진성과

❍ ’22.  1. : 불암도시재생현장지원센터 운영 개시

❍ ’22.  3. : 강변이음센터 부지 보상 완료

❍ ’22.  4. : 도시재생대학 등 SW사업 실시

※ ’22년 SW사업 주요실적 : 도시재생대학 16회, 주민역량강화교육 19회, 주민공모사업 7건

’23년 SW사업 주요실적 : 도시재생대학 21회, 주민역량강화교육 13회, 주민공모사업 7건

❍ ’22. 11. : 불암100년길 정비, 이음건널목 조성 및 소음저감 도로정비 공사 실시설계용역 착수

❍ ’23.  1.  : 강변이음센터 및 강변이음교 실시설계 용역 착수

❍ ’23.  3.  : 강변 주민보행공간 정비 공사 준공

❍ ’23.  9. : 소음저감을 위한 도로정비 공사 준공

❍ ’23. 10. : 이음건널목 조성 공사 준공

❍ ’23. 12. : 강변이음센터 및 강변이음교 실시설계 용역 준공

3) 향후 추진계획

❍ ’24.  2. : 불암 100년길 정비사업, 강변이음센터 및 강변이음교 착공

❍ ’24.  3. : 불암 100년길 정비사업 준공

❍ ’24. 11. : 강변이음센터 및 강변이음교 준공

❍ ’24. 12. : 마을愛홈 집수리지원사업 준공

❍ ’25.  2. : 꼼지락이음센터 착공

❍ ’25. 11. : 꼼지락이음센터 준공

❍ ’25. 12. : 주민공모 SW사업 등 전체 사업 완료