4-5	장유여객터미널 조속 추진
추진부서		대중교통과 / 대중교통팀 / 박춘미 / 2892
추진상황		정상추진	사업구분	□ 신규 ■ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 □ 시 ■ 기타	완료시기	■ 임기내(‘23) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : 2017 ~ 2023

❍ 위    치 : 김해시 장유무계지구 도시개발구역 7BL

❍ 규    모 : 부지 10,656㎡(터미널 3,952) / 상업시설 5층, 터미널 4층

❍ 총사업비 : 840억 원(터미널 130억 원)  * 민간개발사업
❍ 사업내용 : 근린생활시설, 터미널 시설(계류장, 매표소, 대합실, 주민편의시설)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내				임기 후
	2022. 7. ~	2023.	2024.	2025.	2026. ~
사업내용	○지상3층 콘크리트 바닥 완료 ○지하 1~2층 설비, 전기,배관 작업	○각층 손보기 작업	○준공 ○터미널 운영개시	-	-

2) 주요 추진성과

❍ '21. 06. 24. : 건축허가 변경(상업시설 축소, 20층→5층), ⁕ ’20.2.28 건축허가

❍ '21. 10. 07. : 공사시행인가 처리

❍ '21. 12. 08. : 착공 및 기공식 개최

❍ 주요공정(공사) 내용

구분	주요공사 내용	공정율(%)	비고
2023. 5~7월	• 철골 지상 2~5층 설치, 지하 및 각층 창호설치 • 엘리베이트, 에스컬레이터 설치 등	70.21
2023. 8~10월	• 지하 및 지상층 창호 및 유리설치 등 • 조경공사 및 부대토목공사	88.36
2023. 11~12월	• 창호,조명기구,도장 공사 등	99.99
2024. 1~2월	• 각층 각실 손보기 작업 • 2월 준공	100

3) 향후 추진계획

❍ '24. 01. : 터미널‧장유역 연계를 위한 기존 노선버스 조정

❍ '24. 02. : 준공

❍ '24. 04. : 터미널 운행 개시