5-13	진영권역종합사회복지관 건립
추진부서		복지정책과 / 복지정책팀 / 이삼주 / 3282
추진상황		정상추진	사업구분	■ 신규 □ 계속
사업주체		□ 국가 □ 도 ■ 시 □ 기타	완료시기	■ 임기내(‘26) □ 임기후

❏ 사업개요

❍ 기    간 : ‘23. 3. ~ ‘26. 6. (3년 4개월)

❍ 사 업 비 : 180.6억원(시비)

- 토지보상비 12억, 공사비 145억, 시설부대비 7.1억, 예비비 16.5억

❍ 위    치 : 진영한빛도서관 부지(20,044㎡ 중 2,077㎡)

❍ 시설형태 : 종합사회복지관(노인, 장애인 등 다양한 복지수요 충족)

❍ 건축규모 : 건축면적 1,661.2㎡, 연면적 4,983.6㎡(지상3층)

❏ 추진성과 및 계획

1) 추진목표

구 분	임기 내
	23. 3. ~ 8.	23. 7 ~ 12.	24. 1. ~ 25. 4.	25. 4. ~ 26. 5.	26. 6.
사업내용	○ 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역	○ 지방재정투자심사(행안부) ○ 공유재산 관리 계획 반영	○ 부지매입 ○ 도시관리계획결정변경 ○ 건축설계공모 ○ 기획설계 ○ 기획설계승인(경남도) ○ 실시설계	○ 착공	○ 준공

2) 주요 추진성과

❍「건립 타당성 및 기본계획 수립 용역」실시        : ’23. 3.

❍ 종합사회복지관 건립추진 주민협의체 간담회       : ’23. 4.

❍「건립 타당성 및 기본계획 수립 용역」중간 보고회 : ‘23.  6.

❍「건립 타당성 및 기본계획 수립 용역」최종 보고회 : ‘23.  8.

❍ 진영권역 종합사회복지관 기본계획 수립           : ’23.  8. 25.

❍ 지방재정 투자심사 완료(시)                       : ’23. 10. 16.

❍ 공유재산심의회 심의 완료                        : ‘23. 10. 24.

❍ ‘24년 사업비 확보(13억)                          : ‘23. 12.

3) 향후 추진계획

❍ 부지매입, 도시 관리 계획 결정 변경, 건축설계공모, 기획설계  : ‘24.

❍ 착공                                                       : ‘25.

❍ 준공                                                       : ’26.